세부사업명

시멘트산업 이산화탄소 저감 종합실증센터 구축

과제명

이산화탄소 포집 및 광물탄산화 기술 적용 시멘트 제품 종합실증센터 구축

안전관리형 과제

X

개요 및

필요성

ㅇ (개요) 시멘트산업 탄소중립의 핵심 수단인 CCU기술의 상용화를 위한 기술지원 체계 및 기반구축

- CCU기술 실증 및 시험·분석·평가를 위한 종합실증센터 건축

- CO2 포집 소재 및 공정 평가를 위한 실증설비 구축

- 시멘트 2차 제품 광물탄산화를 위한 전주기 실증설비 구축

* 광물탄산화 : 이산화탄소를 활용한 콘크리트 혼합 및 양생

- CO2 포집소재 및 탄산화제품 시험·분석·평가 장비 구축

- CCU 상용화 및 사업화를 위한 기업지원

ㅇ (필요성) 2050 탄소중립 및 2030 NDC 달성을 위해서는 이산화탄소 포집·활용 기술의 상용화가 시급하나 기업의 기술역량 부족, 시설투자에 따른 리스크 및 신뢰성 확보를 위한 적합성평가 기반 부재 등의 이유로 상용화 성공사례 전무

- 기술개발 역량을 강화하기 위한 공동활용 실증설비 구축 필요

- 시설투자에 따른 리스크를 최소화 하기 위한 공정설계 지원 플랫폼 필요

- 적합성평가를 위한 평가방법 개발 및 제품표준 개발 필요

* 적합성평가 : 제품, 공정 등이 요구사항을 충족하는지 평가하는 인증,시험,검사

과제목표

ㅇ (최종목표) 시멘트 산업 탄소중립 달성을 위해 CO2 포집부터 활용제품 생산 및 사업화 지원을 위한 전주기 기업지원 체계를 구축하여 CCU기술의 상용화 성공사례 확보

ㅇ (지원대상 및 범위) 탄소중립 전환을 추진중인 시멘트 산업, CO2 포집소재 및 설비 산업, 레미콘 및 시멘트 2차 제품 생산기업

- CO2포집 소재 및 공정의 산업 맞춤형 적용을 위한 실증기반 구축

- 시멘트 2차 제품 생산기업의 광물탄산화 제품개발/실증/시험·평가/사업화 통합지원 플랫폼 구축 및 운영

과제내용

ㅇ (센터구축) 실증설비 운전 및 기술지원을 위한 전용공간 확보

ㅇ (설비구축) 포집기술(습식공정) 및 광물탄산화(혼합/양생공정) 실증설비 구축

ㅇ (장비구축) 포집소재 및 활용제품 평가를 위한 분석장비 구축

ㅇ (기술지원) 상용화 지원을 위한 기술DB구축 및 표준화(안)* 개발

* 표준화(안): 시험평가법 개발, CCU 제품의 품질기준 도출 등

ㅇ (기업지원) 사업화를 위한 기업지원 및 기술개발 역량강화를 위한 인력양성 교육

구 분	1차년도	2차년도	3차년도
센터구축	-센터 설계	-센터구축	-센터운영
설비구축	-실증설비 설계 -시뮬레이션 장비 구축	-포집 및 원료/혼합 탄산화 실증설비 구축	-양생 탄산화 실증 설비 구축
장비구축	-내구성 평가 장비 구축	-포집소재 분석장비 구축 -탄산화 분석장비 구축	-활용제품 분석장비 구축
기술지원	-기술협의체 및 워킹그룹 구성	-공정설계를 위한 DB구축	-포집소재‧공정/ 콘크리트 2차 제품 표준화(안)개발 -시험평가법 개발
기업지원	-인력양성 교육	-저탄소 경영체계 구축 지원	-시험·분석·평가 지원 -최적 공정설계 지원 -시제품 제작 지원

* 상기 표는 연도별 기반구축 추진계획(안)으로 변동 가능

주요 구축

인프라

ㅇ CCU기술의 상용화를 위한 기술실증 및 기업지원 전용공간 건축

- 실증설비 및 분석장비를 위한 연면적 1,350 ㎡ 이상 전용공간 확보

- 회의실, 교육장 및 사무 공간을 위한 연면적 795 ㎡ 이상 전용공간 확보

ㅇ CO2 포집, 시멘트 2차 제품 광물탄산화를 위한 실증 설비 구축

- 포집공정 설계용 DB화가 가능한 1.5 N㎥/h급 이상 포집 실증 설비 구축

- 콘크리트 재료 탄산화가 가능한 0.2 ㎥급 이상 원료 실증 설비 구축

- 다중원료 사용이 가능한 0.75 ㎥급 이상 콘크리트 혼합 실증 설비 구축

- 이산화탄소 양생이 가능한 3.75 ㎥급 이상 콘크리트 양생 실증 설비 구축

ㅇ CCU 소재 및 제품 시험·분석·평가 장비 구축

- 이산화탄소 흡수제 특성 분석장비 구축(점도, 밀도, 증기압, 반응열 등)

- 광물탄산화 시멘트 2차 제품 평가장비 구축(이산화탄소 흡수량, 내구성 등)

안전관리 중점사항

ㅇ 해당 없음

활용방안

ㅇ 적합성평가 기반 구축으로 포집기술 및 활용기술의 신뢰성을 확보하고 공공시장 진입을 지원하여 CCU기술의 상용화 성공사례 창출

ㅇ 포집 CO2 유효 활용처 확보를 통한 시멘트산업 탄소중립 달성에 기여

ㅇ 공동장비 활용 및 기술지원으로 중소기업의 탄소중립 전환 역량강화

총수행기간

2024년 ∼ 2026년 (3년)

(1차 연도: 2024년 5월 ~ 12월)

총 정부출연금*

(‘24년 정부출연금)

14,500백만원 이내

(1,040백만원)

주관기관

□산업체 ■대학 ■연구소 ■비영리법인 □제한없음

참여기관

□산업체 ■대학 ■연구소 ■비영리법인 □제한없음